COPIA
DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
AREA TECNICO - MANUTENTIVA

n.  30    del 12-07-2017

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale.	

L'anno  duemiladiciassette addì  dodici del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D. L.g.s.  18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
Visto il decreto Sindacale n. 4 del 16.06.2015,  con il quale sono state attribuite al Geom. Delussu Ennio le competenze gestionali inerenti l’area Tecnica – Unità Organizzativa Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n.  267;
Visto l’art. 109 del D. Lgs 18.08.2000, n.  267;
Visto il regolamento di contabilità;

Premesso che questo ente, come stabilito dagli art. 11-bis e 17 della L.R. 17/99 come modificati dalla L.R. 12/2011 all’art 18 c. 10 lett. c), ha partecipato alla formazione di un programma di interventi per la realizzazione e adeguamento di impianti sportivi da destinare ad uso sovra comunale.

Atteso che la proposta formulata da questo Comune, mediante  nota prot. 2688 del 05.11.2012, risulta finalizzata all’esecuzione dei lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale. 

Vista la nota prot. 2265 del 07.02.2013 della Regione Sardegna – Ass.to alla Pubblica Istruzione e più, con la quale viene comunicato che l’ente con delibera della G.R. n. 2/28 del 16.02.2013, risulta inserito nel programma di interventi di impiantistica sportiva a valere sul fondo di sviluppo e coesione (FCS) 2007-2013. 

Dato atto che al Comune di Goni è stata attribuita, con i predetti provvedimenti, una quota di 160.000 euro, alla quale dovrà sommarsi il cofinanziamento del 10% che lo stesso si è impegnato ad apportare con fondi a proprio carico dell’importo di €. 17.777,77. 

Dato atto pertanto che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad €. 177.777,77. 

Richiamata la determinazione dell’Ufficio Tecnico – u.o. Lavori Pubblici e pianificazione urbanistica n. 07 del 07.03.2013 con la quale il Geom. Ennio Delussu è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ed altresì incaricato per la redazione della progettazione preliminare. 

Dato atto che le risorse finanziarie per procedere in merito risultano imputate in bilancio come segue: 
-	€.   160.000,00 codice bilancio n. 06.01-2.02.01.09.000  ex. cap. 2830.1;
-	€.     17.777,77 codice bilancio n. 06.01-2.02.01.09.000 ex. cap. 2830.2;

Atteso che l’intervento di che trattasi, è stato inserito nell’elenco annuale del piano delle opere pubbliche 2014-2016  e annualità successive. 

Vista la delibera della G.M. n. 18 del 27.03.2013 con la quale è stata approvata la progettazione preliminare dell’opera. 

Richiamata la determinazione dell’Ufficio Tecnico – u.o. Lavori pubblici e pianificazione urbanistica n. 24 del 17.12.2013 con la quale si è disposto di procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria concernenti la progettazione  definitiva, esecutiva,  la direzione e contabilità dei lavori nonchè le funzioni ex art. 90 c. 3-4 del D.L.vo 81/2008 per la realizzazione dei lavori di che trattasi in economia mediante cottimo con affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 c. 11 secondo capoverso del D.Lgs. 163/2011

Richiamata la determinazione dell’Ufficio Tecnico – u.o. Lavori pubblici e pianificazione urbanistica n. 08 del 21.03.2014 con la quale si è proceduto all’affidamento dei suddetti servizi di ingegneria per la realizzazione del presente intervento all’Ing. Trincas Enrico residente a Sestu in via 8 marzo n. 18 con studio tecnico a Sestu in via 8 marzo n. 18 partita IVA 02394650929. 

Vista la deliberazione della G.M. n. 19 del 08.07.2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale.
 
Richiamata la propria determinazione n. 17 del 10.07.2015 con la quale si proceduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale di che trattasi per l’importo complessivo di € 177.777,77, dei quali € 134.300,00 per lavori ed oneri di sicurezza avente il seguente quadro economico: 

01	Lavori a base d’asta	     €.     81.851,55	
02	Importo mano d’opera	     €.     47.747,94 	
03	Oneri sicurezza 	     €.       4.700,51	
04	IVA lavori 10% 	     €.     13.430,00	
05	Spese tecniche  IVA compresa	     €.     27.375,82	
06	Oneri ex. Art. 92 c. 5 codice 	     €.       1.423,58	
07	Imprevisti, pubblicità, polizza validazione, contributo ANAC 	     €.          748,37	
08	Accantonamento ex art. 133 c. 3 e 4 codice	     €.          200,00	
09	Spese per collaudi e prove	     €.          300,00	
TOTALE COMPLESSIVO	     €.   177.777,77	

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 18 del 13.07.2015 con la quale si è proceduto ad indire la gara d’appalto per la realizzazione dell’opera, mediante il sistema della procedura negoziata  ai sensi degli art.li 53 c. 2 lett. a),  81 e 82 comma 2 lett. a) e 122 c. 7  e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, nonchè art. 17 c. 4 lett. c) e art. 18 c. 1 lett. a) punto 1) della L.R. 05/2007. 

Richiamata integralmente  la propria determinazione n. 33 del 28.10.2015 con la quale è stato approvato il verbale n. 3/2015 del 29.07.2015 di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata e quindi l’elenco delle ditte nonchè è stata fissata la data per l’esperimento della procedura negoziata stessa per il giorno 18.11.2015. 

Dato atto che sulla scorta delle predette determinazioni e della lettera d’invito diramata l’esperimento della gara è avvenuto con n. 3 sedute di gara, tenute in data 18.11.2015, 30.11.2015, 22.12.2015.

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 25 del 20.06.2016 con la quale si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad aggiudicare definitivamente i lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale all’operatore F.lli Angius srl, via Farina n. 18 – Gairo P. IVA n. 01294820913, che ha offerto il ribasso del 28,125% sull’importo di €. 129.599,49 posto a base di gara e soggetto a ribasso, quindi per un importo netto di aggiudicazione pari a €. 93.149,62 oltre € 4.700,51 per gli oneri per la sicurezza e l’IVA di legge.

Visto il contratto rep. 196 in data 01.03.2017, registrato telematicamente in data 03.03.2017 al n. 1798 serie 1 T, intercorrente con l’operatore F.lli Angius srl aggiudicatario dei predetti lavori, dell’importo complessivo di €. 97.850,13 oltre l’IVA.  

Atteso che a seguito della gara d’appalto e del conseguente affidamento dei lavori il quadro economico derivato è il seguente: 

01	Lavori al netto del -28,125%	     €.     93.149,62	
02	Oneri sicurezza 	     €.       4.700,51	
03	IVA lavori 10% 	     €.       9.785,01	
04	Spese tecniche  IVA compresa	     €.     27.375,82	
05	Oneri ex. Art. 92 c. 5 codice 	     €.       1.423,58	
06	Imprevisti, pubblicità, polizza validazione, contributo ANAC 	     €.          748,37	
07	Accantonamento ex art. 133 c. 3 e 4 codice	     €.          200,00	
08	Spese per collaudi e prove	     €.          300,00	
09	Economie d’asta	     €.     40.094,86	
TOTALE COMPLESSIVO	     €.   177.777,77	

Dato atto che i lavori hanno avuto inizio in data 20.03.2017.

Dato atto che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante per superare alcune difficoltà impreviste ed imprevedibili ed apportare delle migliorie esecutive tali da rendere l’intervento confacente alle condizioni degli ambiti riscontrati in sede di esecuzione lavori. 

Vista la richiesta in tal senso del direttore dei lavori Ing. Enrico Trincas in data 07.07.2017 prot. 2115. 

Vista l’autorizzazione del RUP in data 07.07.2017 prot. 2116, per la redazione della perizia suppletiva e di variante di che trattasi. 

Atteso che l’art. 56 della L.R. 05/2007 al comma 1 lett. g) consente la redazione di varianti nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione ma contenute nel 10% dell’importo contrattuale. 

Vista la perizia suppletiva predisposta dal direttore dei lavori Ing. Trincas Enrico con studio in Sestu,   dell’importo complessivo di €. 177.777,77 pari all’importo originario di progetto, dei quali €. 97.140,65 per lavori al netto del ribasso d’asta del 28,125% offerto dall’aggiudicatario oltre € 4.815,59 per oneri di sicurezza, comportante un importo suppletivo di €. 4.106,11 pari al 4,20% dell’importo di contratto, trovante copertura nelle economie d’asta presenti nelle somme a disposizione dell’amministrazione. 

Valutato che le opere previste in perizia, emerse successivamente alle attività di scavo, risultano necessarie per la realizzazione delle opere e  che alcuni interventi operano in diminuzione o in miglioria rispetto alle previsioni di progetto. 

Valutato che l’importo suppletivo dei lavori risulta contenuto sia nell’art. 56 c. 1 lett. g) della L.R. 05/2007 che nell’art. 132 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 e che la competenza all’adozione del provvedimento di approvazione, stante il mancato stravolgimento progettuale e la sussistenza delle risorse nel quadro economico di progetto è posta in capo, dall’art. 161 c. 9 del D.P.R. 207/2010 al Responsabile del Procedimento che in quest’opera è anche Responsabile del Servizio Tecnico.   

Atteso che per la presente procedura è stato acquisito il CUP n. H25G13000000005.

Atteso che per la presente procedura è stato acquisito il CIG n. 6333902547.

Ritenuto dover provvedere all’approvazione della perizia di che trattasi. 

Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 207/2000.

DETERMINA

Di approvare la premessa.

Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale, come predisposta dal direttore dei lavori Ing. Trincas Enrico di Sestu, dell’importo complessivo di € 177.777,77, avente il seguente quadro economico: 

01	Lavori al netto del -28,125%	     €.     97.140,65	
02	Oneri sicurezza 	     €.       4.815,59	
03	IVA lavori 10% 	     €.     10.195,62	
04	Spese tecniche  IVA compresa	     €.     28.571,98	
05	Oneri ex. Art. 92 c. 5 codice 	     €.       1.483,66	
06	Imprevisti, pubblicità, polizza validazione, contributo ANAC 	     €.            50,07	
07	Accantonamento ex art. 133 c. 3 e 4 codice	     €.              0,00	
08	Spese per collaudi e prove	     €.              0,00	
09	Economie d’asta	     €.     35.520,20	
TOTALE COMPLESSIVO	     €.   177.777,77	

Di trasmettere copia della presente e della perizia suppletiva e di variante di che trattasi per il nulla osta di competenza alla Regione Sardegna – Ass.to alla Pubblica Istruzione e più, finanziatore dell’intervento con il fondo di sviluppo e coesione (FCS) 2007-2013. 

Di dare mandato al Responsabile del Servizio, appena ottenuto il nulla osta regionale, per la stipula dell’atto di sottomissione con l’impresa F.lli Angius srl, via Farina n. 18 – Gairo P. IVA n. 01294820913,  dando atto che il medesimo, stante l’esiguità dell’importo, verrà redatto con la forma della scrittura privata ai sensi dell’art. 11 c. 13 del D.L.gs. 163/2006 nonchè art. 15 comma 9 della L.R. 05/2007.  

Di impegnare per effetto della presente la maggior somma di €. 4.516,72 a favore dell’affidatario dei lavori impresa F.lli Angius srl di Gairo. 

Di impegnare per effetto della presente la maggior somma di €. 1.196,16 a favore dell’ing. Trincas Enrico di Sestu, direttore dei lavori. 

Di dare atto che i lavori di che trattasi sono cofinanziati con il fondo di sviluppo e coesione (FCS) 2007-2013.

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il  Geom. Ennio Delussu. 

Di dare atto che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. 

Di dare atto che a norma dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
-	Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del provvedimento, ai sensi degli art. 29, 41 e segg. del D.Lgs. 104/2010; 
-	Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità ai sensi dell’art. 8 del  D.P.R. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni dal termine di pubblicazione del provvedimento.

Di dare atto che in riferimento al presente procedimento verranno assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale. 

Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento ed al Responsabile del Servizio cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e smi, come introdotto dall’art. 1 c. 41 della L. n. 190/2012.   

Di dare atto che, sulla base dell’attestazione del responsabile del Servizio Contabile, reso ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, la spesa complessiva derivante dalla presente, pari ad €. 5.712,88, trova copertura con i medesimi fondi dell’opera principale secondo le seguenti modalità: 

-	€.     5.141,59 (90%) codice bilancio n. 06.01-2.02.01.09.000 ex. cap. 2830.1 - imp. 111/2;
-	€.        571,29 (10%) codice bilancio n. 06.01-2.02.01.09.000 ex. cap. 2830.2 - imp. 112/2;

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Geom. ENNIO DELUSSU	

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000. 

IMPEGNO DI SPESA	
N.	  111	sub
    3	Anno
2015	del
27-12-2013	Comp./Res.
R	
Capitolo
      2830	Articolo
    1	Cod. bil.
2060101	SIOPE
2115	Descrizione capitolo:
COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - FONDO SVILUPPO E COESIONE ANNI 2007-2013	
Causale impegno	Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale.	
Importo operazione	€.       4.516,72	
DATI BENEFICIARIO	
Codice beneficiario
     2449	Ragione sociale beneficiario:
F.lli Angius srl
via Farina 18
08040 - Gairo (OG)	
IMPEGNO DI SPESA	
N.	  111	sub
    4	Anno
2015	del
27-12-2013	Comp./Res.
R	
Capitolo
      2830	Articolo
    1	Cod. bil.
2060101	SIOPE
2115	Descrizione capitolo:
COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - FONDO SVILUPPO E COESIONE ANNI 2007-2013	
Causale impegno	Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale.	
Importo operazione	€.         624,87	
DATI BENEFICIARIO	
Codice beneficiario
     2326	Ragione sociale beneficiario:
TRINCAS ENRICO
VIA 8 MARZO N. 18
09028 - SESTU (CA)	
IMPEGNO DI SPESA	
N.	  112	sub
    4	Anno
2013	del
27-12-2013	Comp./Res.
R	
Capitolo
      2830	Articolo
    2	Cod. bil.
2060101	SIOPE
2115	Descrizione capitolo:
COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - QUOTA COMUNALE	
Causale impegno	Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale.	
Importo operazione	€.         571,29	
DATI BENEFICIARIO	
Codice beneficiario
     2326	Ragione sociale beneficiario:
TRINCAS ENRICO
VIA 8 MARZO N. 18
09028 - SESTU (CA)	

Goni,  lì 27-07-2017 
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
		F.to 	 Domenico Antonio Delussu

Copia Conforme ad uso amministrativo.

	L’IMPIEGATO INCARICATO